2015년, 문화재수리 표준품셈 개정 세부내역

	전체 10공종 35항목

○ 신설 3공종 7항목

제5장 지붕공사	5-18 장식기와설치(용두)
	5-26 연죽설치
	5-27 초가지붕해체
제11장 석공사	11-28 거친돌계단해체
	11-30 거친돌계단설치
	11-31 마름돌계단설치
제13장 단청공사	13-20 면닦기(단청제거)

○ 조정 7공종 28항목

제1장 적용기준	1-11 토질 및 암의 분류
	1-17 품의 할증
제5장 지붕공사	5-0 적용기준
	5-18 초가알매흙치기
	5-19 초가지붕처마기스락설치
	5-20 이엉엮기
	5-21 이엉이기
	5-22 용마름엮기
	5-23 용마름이기
	5-24 고사새끼엮기
제6장 전돌공사	6-5 전돌깔기
제9장 온돌공사	9-1 온돌해체
	9-2 고래설치
	9-3 구들놓기
	9-4 방바닥미장바르기
	9-5 아궁이설치
	9-6 부뚜막설치
	9-7 굴뚝설치
제11장 석공사	11-0 적용기준
제13장 단청공사	13-0 적용기준
	13-12 먹긋기
	13-13 색긋기
	13-14 모로단청
	13-15 금모로단청
	13-16 금단청
	13-17 별화
	13-18 벽화
제15장 기타공사	15-0 적용기준

	항목별 개정(안)

구분

당    초

개    정

비    고

제1장 적용기준

조정

1-11 토질 및 암의 분류

[주] 표준품셈에 표시되는 돌재료의 분류는 다음을 기준으로 한다.

⑲ 굵은모래(粗砂) : 천연산으로서 지름 0.25∼2mm 정도의 알맹이의 돌

⑳ 잔모래(細砂) : 천연산으로서 지름 0.05∼0.25mm  정도의 알맹이의 돌

1-11 토질 및 암의 분류

[주] 표준품셈에 표시되는 돌재료의 분류는 다음을 기준으로 한다.

⑲ 굵은모래(粗砂) : 천연산으로서 지름 0.25∼2mm 정도 크기의 돌 성분

⑳ 잔모래(細砂) : 천연산으로서 지름 0.05∼0.25mm 정도 크기의 돌 성분

조정

1-17 품의 할증

9. 특수작업 할증률

③ 작업의 중요성 또는 특별한 시방에 따라 특수한 기술과 안전관리 등을 위하여 기술원(기술자, 기술사 및 기사, 특수자격자, 특수기능사, 안전관리자, 방제기술자 등) 및 감독원이 투입될 경우에는 필요에 따라 본 작업에 대하여 인력품을 5∼10%까지 가산한다.

1-17 품의 할증

9. 특수작업 할증률

③ 작업의 중요성 또는 특별한 시방에 따라 문화재 분야 외 타 분야의 특수한 기술과 안전관리 등을 위하여 기술원(기술자, 기술사 및 기사, 특수자격자, 특수기능사, 안전관리자, 방제기술자 등) 및 감독원이 투입될 경우에는 필요에 따라 본 작업에 대하여 인력품을 5∼10%까지 가산한다.

제5장 지붕공사

조정

5-0 적용기준

9. 수량산출기준은 다음과 같다.

① 산자엮기

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎡	(a×ℓ)×2면
우진각	㎡	{(a+a')×ℓ1×1/2}×2면+(b×ℓ′1×1/2)×2면
팔작	㎡	(c×ℓ1)×2면+(d×ℓ′1)×2면+(e×ℓ′1×1/2)×4면+(f×ℓ′1×1/2)×4면
사모정 등	㎡	(a×ℓ1×1/2)×4면	육모정: ×6면 팔모정: ×8면

② 적심설치

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎡	(a×ℓ1)×2면×0.9×t
우진각	㎡	[{(a+a')×ℓ1×1/2}×2면+(b×ℓ′1×1/2)×2면]×0.9×t
팔작	㎡	[(c×ℓ1)×2면+(d×ℓ′1)×2면+(e×ℓ′1×1/2)×4면+(f×ℓ′1×1/2)×4면]×0.9×t
사모정 등	㎡	[(a×ℓ1×1/2)×4면]×0.9×t	육모정: ×6면 팔모정: ×8면
[주] t : 적심설치 최대두께×1/2

③ 보토다짐‧생석회다짐(지붕)

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎡	(a×ℓ1)×2면×t
우진각	㎡	[{(a+a')×ℓ1×1/2}×2면+(b×ℓ′1×1/2)×2면]×t
팔작	㎡	[(c×ℓ1)×2면+(d×ℓ′1)×2면+(e×ℓ′1×1/2)×4면+(f×ℓ′1×1/2)×4면]×t
사모정 등	㎡	[(a×ℓ1×1/2)×4면]×t	육모정: ×6면 팔모정: ×8면
[주] t : 다짐두께

④ 기와고르기･기와이기

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎡	(a×ℓ)×2면
우진각	㎡	{(a+a')××1/2}×2면+(b×ℓ×1/2)×2면
팔작	㎡	(c×ℓ)×2면+(d×ℓ′1)×2면+(e×ℓ×1/2)×4면+(f×ℓ′1×1/2)×4면
사모정 등	㎡	(a×ℓ×1/2)×4면	육모정: ×6면 팔모정: ×8면

⑥ 초가지붕

구분	단위	산출식	비고
초가알매흙치기	㎥	보토다짐과 동일
초가지붕 처마기스락설치	㎡	설치면적 (뒷길이 포함)
이엉엮기	m	이엉길이
이엉이기	㎡	지붕면적
용마름엮기	m	용마름길이
용마름이기	m	용마름설치길이
고사새끼엮기	㎡	기와이기와 동일

[주] ③ 팔작	c	: 정면에서 내림마루 중심선 사이의 직선 길이
	d	: 측면에서 내림마루와 추녀마루 중심선의 교차점 사이의 직선 길이
	e	: 정면에서 내림마루 중심선과 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 직선 길이
	f	: 측면에서 내림마루 중심선과 추녀마루 중심선의 교차점을 지나는 내림마루와 직각방향의 직선과 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 직선 길이
	ℓ	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 막새기와끝까지의 직선 길이
	ℓ1	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	ℓ2	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 부연끝까지의 직선 길이
	ℓ′	: 횡단면도에서 내림마루 중심선과 막새기와끝까지의 직선 길이
	ℓ′1	: 횡단면도에서 내림마루 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	ℓ′2	: 횡단면도에서 내림마루 중심선과 부연끝까지의 직선 길이

5-0 적용기준

9. 수량산출기준은 다음과 같다.

① 산자엮기

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎡	(a×ℓ)×2면
우진각	㎡	{(a+a')×ℓ1×1/2}×2면+(b×ℓ′1×1/2)×2면
팔작	㎡	(c×ℓ1)×2면+(d×ℓ′1)×2면+(e×ℓ″1×1/2)×4면+(f×ℓ′1×1/2)×4면
사모정 등	㎡	(a×ℓ1×1/2)×4면	육모정: ×6면 팔모정: ×8면

② 적심설치

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎡	(a×ℓ1)×2면×0.9×t
우진각	㎡	[{(a+a')×ℓ1×1/2}×2면+(b×ℓ′1×1/2)×2면]×0.9×t
팔작	㎡	[(c×ℓ1)×2면+(d×ℓ′1)×2면+(e×ℓ″1×1/2)×4면+(f×ℓ′1×1/2)×4면]×0.9×t
사모정 등	㎡	[(a×ℓ1×1/2)×4면]×0.9×t	육모정: ×6면 팔모정: ×8면
[주] t : 적심설치 최대두께×1/2

③ 보토다짐‧생석회다짐(지붕)

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎡	(a×ℓ1)×2면×t	겹처마 : ℓ2, ℓ′2, ℓ″2
우진각	㎡	[{(a+a')×ℓ1×1/2}×2면+(b×ℓ′1×1/2)×2면]×t
팔작	㎡	[(c×ℓ1)×2면+(d×ℓ′1)×2면+(e×ℓ″1×1/2)×4면+(f×ℓ′1×1/2)×4면]×t
사모정 등	㎡	[(a×ℓ1×1/2)×4면]×t	육모정: ×6면 팔모정: ×8면
[주] t : 다짐두께

④ 기와고르기･기와이기

구분	단위	산출식	비고
맞배	㎡	(a×ℓ)×2면
우진각	㎡	{(a+a')×ℓ×1/2}×2면+(b×ℓ′×1/2)×2면
팔작	㎡	(c×ℓ)×2면+(d×ℓ′)×2면+(e×ℓ″×1/2)×4면+(f×ℓ′×1/2)×4면
사모정 등	㎡	(a×ℓ×1/2)×4면	육모정: ×6면 팔모정: ×8면

⑥ 장식기와

구분	단위	산출식	비고
장식기와설치(용두)	개소	설치수량

⑦ 초가지붕

구분	단위	산출식	비고
초가알매흙치기	㎥	보토다짐과 동일
초가지붕 처마기스락설치	㎡	설치면적 (뒷길이 포함)
이엉엮기	m	이엉길이
이엉이기	㎡	지붕면적
용마름엮기	m	용마름길이
용마름이기	m	용마름설치길이
고사새끼엮기	㎡	기와이기와 동일
연죽설치	m	연죽설치길이
초가지붕해체	㎡	해체면적

[주] ③ 팔작	c	: 정면에서 내림마루 중심선 사이의 직선 길이
	d	: 측면에서 내림마루와 추녀마루 중심선의 교차점 사이의 직선 길이
	e	: 정면에서 내림마루 중심선과 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 직선 길이
	f	: 측면에서 내림마루 중심선과 추녀마루 중심선의 교차점을 지나는 내림마루와 직각방향의 직선과 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 직선 길이
	ℓ	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 막새기와끝까지의 직선 길이
	ℓ1	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	ℓ2	: 종단면도에서 적심도리 중심선과 부연끝까지의 직선 길이
	ℓ′	: 횡단면도에서 내림마루 중심선과 막새기와끝까지의 직선 길이
	ℓ′1	: 횡단면도에서 내림마루 중심선과 서까래끝까지의 직선 길이
	ℓ′2	: 횡단면도에서 내림마루 중심선과 부연끝까지의 직선 길이
	ℓ″	: 측면에서 내림마루 중심선과 추녀마루 중심선의 교차점을 지나는 내림마루와 직각방향의 직선과 추녀(사래) 막새기와끝 사이의 직선 길이
	ℓ″1	: 측면에서 내림마루 중심선과 추녀마루 중심선의 교차점을 지나는 내림마루와 직각방향의 직선과 추녀(사래) 서까래끝 사이의 직선 길이
	ℓ″2	: 측면에서 내림마루 중심선과 추녀마루 중심선의 교차점을 지나는 내림마루와 직각방향의 직선과 추녀(사래) 부연끝 사이의 직선 길이

신설

5-18 장식기와설치(용두)

5-18-1 0.06㎥ 초과

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.08 0.04 0.04 1
[주] ① 본 품은 보양, 운반, 장식기와설치(용두)까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 장식기와 설치를 위한 비계매기는 별도 계상한다. ④ 잡재료(와정, 동선 등)는 별도 계상한다.

5-18-2 0.06㎥ 이하

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.03 0.02 0.01 1
[주] ① 본 품은 보양, 운반, 장식기와설치(용두)까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 장식기와설치를 위한 비계매기는 별도 계상한다. ④ 잡재료(와정, 동선 등)는 별도 계상한다.

조정

5-18 초가알매흙치기

5-19 초가지붕기스락설치

5-20 이엉엮기

5-19 초가알매흙치기

5-20 초가지붕기스락설치

5-21 이엉엮기

조정

5-21 이엉이기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특별인부 공구손료	인력품의 3%	인식	0.12 1
[주] ① 본 품은 3겹이기 1단을 기준으로 한 것이며, 새끼로 이엉을 고정하는 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 군새는 필요시 별도 계상한다. ④ 초가의 약품 처리가 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑤ 신축 시는 이엉의 겹수를 조정하여 산출한다.

5-22 이엉이기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특별인부 공구손료	인력품의 3%	인식	0.12 1
[주] ① 본 품은 3겹이기 1단을 기준으로 한 것이며, 새끼로 이엉을 고정하는 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 군새는 필요시 별도 계상한다. ④ 초가의 약품 처리가 필요한 경우에는 별도 계상한다. ⑤ 신축 시는 이엉의 단수를 조정하여 산출한다.

조정

5-22 용마름엮기

5-23 용마름이기

5-24 고사새끼엮기

5-23 용마름엮기

5-24 용마름이기

5-25 고사새끼엮기

신설

5-26 연죽설치

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
대나무 특별인부 공구손료	인력품의 3%	m 인 식	1.18 0.01 1
[주] ① 본 품은 연죽자르기, 연죽설치까지를 기준으로 한 것이다. ② 연죽의 겹침길이는 600㎜를 기준으로 한다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 본 품의 재료는 죽재를 사용하여 작업한 것이며 설계도서에 따라 다른 재료로 대체할 수 있다.

신설

5-27 초가지붕해체

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특별인부 공구손료	인력품의 3%	인식	0.03 1
[주] ① 본 품은 초가지붕해체 중 고사새끼해체, 용마름·처마마름해체, 이엉해체까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 잡재료는 별도 계상한다.

제6장 전돌공사

조정

6-5 전돌깔기

6-5-3 습식 225㎜×225㎜×45㎜

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 시멘트 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	225㎜×225㎜×45㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	20.6 17.48 0.033 0.08 0.09 0.07 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

6-5 전돌깔기

6-5-3 습식 225㎜×225㎜×45㎜

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
전돌 생석회 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	225㎜×225㎜×45㎜ 인력품의 3%	매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	20.6 17.48 0.033 0.08 0.09 0.07 1
[주] ① 줄눈나비는 10㎜를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 초석, 기단 등에 접하는 부분의 전돌을 다듬는 품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

제9장 온돌공사

조정

9-1 온돌해체

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.15 0.05 0.04 1
[주] ① 본 품의 해체는 방바닥미장, 부토, 거미줄, 구들장, 고래둑, 시근담, 개자리․고래바닥까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 아궁이해체는 필요시 별도 계상한다. ④ 잡재료는 별도 계상한다.

9-1 온돌해체

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
온돌공·한식미장공 온돌공조공·한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.15 0.05 0.04 1
[주] ① 본 품의 해체는 방바닥미장, 부토, 거미줄, 구들장, 고래둑, 시근담, 개자리․고래바닥까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 아궁이해체는 필요시 별도 계상한다. ④ 잡재료는 별도 계상한다.

조정

9-2 고래설치

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 잡석 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎥ ㎥ 인 인 인 식	0.11 0.18 0.21 0.07 0.04 1
[주] ① 본 품은 고래바닥, 개자리, 시근담, 고래둑까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 나란히고래일 때를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 연도설치는 별도 계상한다.

9-2 고래설치

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 잡석 온돌공·한식미장공 온돌공조공·한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎥ ㎥ 인 인 인 식	0.11 0.18 0.21 0.07 0.04 1
[주] ① 본 품은 고래바닥, 개자리, 시근담, 고래둑까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 나란히고래일 때를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 연도설치는 별도 계상한다.

조정

9-3 구들놓기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 잡석 구들장 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎥ ㎥ ㎡ 인 인 인 식	0.09 0.12 1.1 0.12 0.04 0.03 1
[주] ① 본 품은 구들장, 거미줄까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

9-3 구들놓기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 잡석 구들장 온돌공·한식미장공 온돌공조공·한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎥ ㎥ ㎡ 인 인 인 식	0.09 0.12 1.1 0.12 0.04 0.03 1
[주] ① 본 품은 구들장, 거미줄까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

조정

9-4 방바닥미장바르기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 모래 부토 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	5 0.04 0.30 0.26 0.08 0.05 1
[주] ① 본 품은 부토, 방바닥미장까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

9-4 방바닥미장바르기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
생석회 모래 부토 온돌공·한식미장공 온돌공조공·한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	5 0.04 0.30 0.26 0.08 0.05 1
[주] ① 본 품은 부토, 방바닥미장까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.09인을 가산한다.

조정

9-5 아궁이설치

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
이맛돌 붓돌 진흙 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎥ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	0.05 0.08 0.09 0.24 0.15 0.11 1
[주] ① 본 품은 함실아궁이를 기준으로 한 것이다. ② 아궁이 규격은 너비 400㎜∼450㎜, 높이 400㎜∼450㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

9-5 아궁이설치

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
이맛돌 붓돌 진흙 온돌공·한식미장공 온돌공조공·한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	㎥ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	0.05 0.08 0.09 0.24 0.15 0.11 1
[주] ① 본 품은 함실아궁이를 기준으로 한 것이다. ② 아궁이 규격은 너비 400㎜∼450㎜, 높이 400㎜∼450㎜를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

조정

9-6 부뚜막설치

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 잡석 장작	230×200×110㎜	㎥ ㎥ 지게	0.859 0.715 0.5
생석회 진흙 모래		㎏ ㎥ ㎥	3.476 0.005 0.002	외벽 마감
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.95 0.29 0.19 1
[주] ① 본 품은 바닥고르기, 부뚜막내·외벽, 아궁이, 부뚜막외벽마감까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 부뚜막높이 0.6∼1m일 때를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 솥걸이대가 포함되어 있다. ⑥ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑦ 불때기는 별도 계상한다.

9-6 부뚜막설치

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
진흙 잡석 장작	230㎜×200㎜×110㎜	㎥ ㎥ 지게	0.859 0.715 0.5
생석회 진흙 모래		㎏ ㎥ ㎥	3.476 0.005 0.002	외벽 마감
온돌공·한식미장공 온돌공조공·한식미장공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.95 0.29 0.19 1
[주] ① 본 품은 바닥고르기, 부뚜막내·외벽, 아궁이, 부뚜막외벽마감까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 부뚜막높이 0.6∼1m일 때를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 솥걸이대가 포함되어 있다. ⑥ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑦ 불때기는 별도 계상한다.

조정

9-7 굴뚝설치

9-7-1 전축굴뚝

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 암막새 수막새 망와 연가 전돌(건식) 전돌(습식) 모래 진흙 마사토 생석회 한식미장공 한식미장공조공 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	소와 소와 소와 소와 소와 190㎜×90㎜×57㎜ 190㎜×90㎜×57㎜ 인력품의 3%	매 매 매 매 매 매 매 ㎥ ㎥ ㎥ ㎏ 인 인 인 인 인 식	91 35 27 27 4 설계량 221.1 353.07 0.64 0.16 0.04 598.05 7.50 4.28 1.05 1.00 0.94 1
[주] ① 본 품은 규격 1,000㎜×775㎜×2,780㎜인 전축굴뚝을 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 건식쌓기 높이 650㎜ 내외, 습식쌓기 높이 1,425㎜ 내외를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 굴뚝개자리설치품이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 굴뚝상부에 기와이기, 마루기와이기, 연가설치 품이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑥ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑦ 줄눈바름은 별도 계상하되, “6-6 줄눈바름/6-6-1 전돌벽”에 따른다. ⑧ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

9-7-2 오지굴뚝

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
오지관(토관) 전돌 생석회 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	∅180㎜×1,100㎜ 190㎜×90㎜×57㎜ 인력품의 3%	개 매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	1 41 30.35 0.08 0.25 0.74 0.12 1
[주] ① 본 품은 규격 430㎜×320㎜×500㎜인 오지굴뚝을 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 굴뚝개자리설치품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다.

9-7-3 와편굴뚝

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 연가 생석회 모래 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료	중와 인력품의 3%	매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	40 설계량 130.1 0.33 0.48 0.40 0.11 1
[주] ① 본 품은 규격 600㎜×600㎜×820㎜인 와편굴뚝을 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 굴뚝개자리설치, 연가설치품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다.

9-7 굴뚝설치

9-7-1 전축굴뚝

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 암막새 수막새 망와 연가 전돌(건식) 전돌(습식) 모래 진흙 마사토 생석회 온돌공·한식미장공 온돌공조공·한식미장공조공 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	소와 소와 소와 소와 소와 190㎜×90㎜×57㎜ 190㎜×90㎜×57㎜ 인력품의 3%	매 매 매 매 매 매 매 ㎥ ㎥ ㎥ ㎏ 인 인 인 인 인 식	91 35 27 27 4 설계량 221.1 353.07 0.64 0.16 0.04 598.05 7.50 4.28 1.05 1 0.94 1
[주] ① 본 품은 규격 1,000㎜×775㎜×2,780㎜인 전축굴뚝을 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 건식쌓기 높이 650㎜ 내외, 습식쌓기 높이 1,425㎜ 내외를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 굴뚝개자리설치품이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 굴뚝상부에 기와이기, 마루기와이기, 연가설치 품이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑥ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다. ⑦ 줄눈바름은 별도 계상하되, “6-6 줄눈바름/6-6-1 전돌벽”에 따른다. ⑧ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

9-7-2 오지굴뚝

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
오지관(토관) 전돌 생석회 모래 온돌공·한식미장공 온돌공조공·한식미장공조공 보통인부 공구손료	∅180㎜×1,100㎜ 190㎜×90㎜×57㎜ 인력품의 3%	개 매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	1 41 30.35 0.08 0.25 0.74 0.12 1
[주] ① 본 품은 규격 430㎜×320㎜×500㎜인 오지굴뚝을 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 굴뚝개자리설치품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다.

9-7-3 와편굴뚝

(개소당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 연가 생석회 모래 온돌공·한식미장공 온돌공조공·한식미장공조공 보통인부 공구손료	중와 인력품의 3%	매 ㎏ ㎥ 인 인 인 식	40 설계량 130.1 0.33 0.48 0.4 0.11 1
[주] ① 본 품은 규격 600㎜×600㎜×820㎜인 와편굴뚝을 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 굴뚝개자리설치, 연가설치품이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100kg당 보통인부 0.09인을 가산한다.

제11장 석공사

조정

11-0 적용기준

1. 해체‧쌓기시 아래 높이에 따라 인력품을 가산한다.

3∼4m 이하      30%

4∼5.5m 이하    40%

5.5∼7.5m 이하   60%

7.5m 초과        80∼100%

3. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 치석 혹두기 20㎡당 1인

거친정다듬 6㎡당 1인

고운정다듬 3㎡당 1인

도드락다듬 2㎡당 1인

잔다듬 1㎡당 1인

② 석재쌓기 3㎥당 1인

③ 석재해체 5㎥당 1인

④ 채움석쌓기·해체 : 9㎥당 1인

⑤ 치석 정다듬(기계장비) : 39㎥당 1인

도드락다듬(기계장비) : 24㎥당 1인

⑥ 석재쌓기(기계장비) : 9㎥당 1인

⑦ 석재해체(기계장비) : 20㎥당 1인

4. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
할석	㎥	체적
치석	㎡	가공면적
석재해체･쌓기	㎥	체적
성곽	㎥	성벽면적× 뒤뿌리 평균두께	석축 동일
채움석해체･쌓기	㎥	체적
바닥박석깔기	㎡	바닥면적
여장설치	㎥	체적	총안 포함

11-0 적용기준

1. 해체‧쌓기시 아래 높이에 따라 인력품을 가산한다.

3m 초과∼4m 이하      30%

4m 초과∼5.5m 이하    40%

5.5m 초과∼7.5m 이하   60%

7.5m 초과              80∼100%

3. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 치석 혹두기 20㎡당 1인

거친정다듬 6㎡당 1인

고운정다듬 3㎡당 1인

도드락다듬 2㎡당 1인

잔다듬 1㎡당 1인

② 석재쌓기 3㎥당 1인

③ 석재해체 5㎥당 1인

④ 채움석쌓기·해체 : 9㎥당 1인

⑤ 치석 정다듬(기계장비) : 39㎡당 1인

도드락다듬(기계장비) : 24㎡당 1인

⑥ 석재쌓기(기계장비) : 9㎥당 1인

⑦ 석재해체(기계장비) : 20㎥당 1인

4. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식	비고
할석	㎥	체적
치석	㎡	가공면적
석재해체･쌓기	㎥	체적
성곽	㎥	성벽면적× 뒤뿌리 평균두께	석축 동일
채움석해체･쌓기	㎥	체적
바닥박석깔기	㎡	바닥면적
여장설치	㎥	체적	총안 포함
거친돌계단설치	㎥	체적
마름돌계단설치	㎥	체적
거친돌계단해체	㎥	체적

신설

11-28 거친돌계단해체

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	0.65 0.26 0.13 1
[주] ① 본 품은 부재번호매기기, 디딤돌해체, 해체부재 운반·정리까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 뒤채움해체는 별도 계상한다.

신설

11-29 거친돌계단설치

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	3.44 1.37 0.69 1
[주] ① 본 품은 규준틀설치(기준실치기), 돌고르기, 부재운반, 디딤돌설치까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 뒤채움해체는 별도 계상한다.

신설

11-30 마름돌계단설치

(㎥당)

구분	규격	단위	수량	비고
한식석공 한식석공조공 보통인부 공구손료	인력품의 3%	인인인식	1.77 0.71 0.36 1
[주] ① 본 품은 규준틀설치(기준실치기), 부재운반, 디딤돌설치까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 뒤채움채우기는 별도 계상한다. ④ 소맷돌설치는 별도 계상한다.

제13장 단청공사

조정

13-0 적용기준

5. 편수산정기준은 다음과 같다.

채색 : 15㎡당 1인

6. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식		비고
원형부재	㎡	면	2×π×r×ℓ
		마구리	π×r2
각형부재	㎡	면	(a 또는 b)×ℓ×면의수
		마구리	a×b
판재	㎡	면	a×b
[주] ① a:가로, b:세로, r:반지름, ℓ:부재길이 ② 원형부재는 기둥, 굴도리, 서까래, 선자서까래, 동자기둥을 말한다. ③ 각형부재는 보, 창방, 평방, 납도리, 장여, 인방, 벽선, 부연, 목기연, 평고대, 추녀, 사래, 살미, 첨차, 익공, 대공, 보아지, 갈모산방, 포대공, 주두, 소로를 말한다. ④ 판재는 개판, 박공널, 풍판, 착고판, 판대공, 화반을 말한다. ⑤ 따내기, 홈파기, 파내기, 그레질, 후리기, 바데떼기, 모접기, 소매걷이 및 이에 준하는 것의 면적은 공제하지 아니한다. ⑥ 부재마다 단청문양별(가칠, 긋기, 모로, 금모로, 금단청)로 면적을 산출한다. ⑦ 수량산출도식 ㉮ 창방 : 최대단면 기준 - 측면 모로단청 : b×ℓ×2면(가칠) b×ℓ1×2×2면(채색) 금·금모로단청 : b×ℓ×2면(가칠) b×ℓ1×2×2면(채색) - 배면 : 벽체의 유무에 따라 가감한다. ㉯ 평서까래 : 주심도리 위 최대단면 기준 - 뒤뿌리 비노출 : 2×π×r×ℓ1(가칠) 2×π×r×ℓ1(채색) - 뒤뿌리 노출 : 2×π×r×ℓ(가칠) 2×π×r×ℓ1(채색) - 마구리 : π×r2 ㉰ 선자서까래 : 주심도리 위 최대단면 기준 - 뒤뿌리 비노출 : 2×π×r×ℓ1(가칠) 2×π×r×ℓ1(채색) - 뒤뿌리 노출 : 2×π×r×ℓ1+2×r×ℓ2 ×1/2(가칠) 2×π×r×ℓ1(채색) - 마구리 : π×r2 ㉱ 부연 : 최대단면 기준 - 밑면 : a×ℓ1 - 측면 : b×ℓ1×2면 - 마구리 : a×b ㉲ 살미 : 최대단면 기준 - 밑면 : a×ℓ - 측면 : b×ℓ×2면 - 마구리 : a×b×2면 ㉳ 주두·소로 : 최대단면 기준 - 측면 : a×h×4면

13-0 적용기준

5. 편수산정기준은 다음과 같으며, 모로단청, 금모로단청, 금단청, 별화, 벽화에 적용한다.

채색 : 15㎡당 1인

6. 수량산출기준은 다음과 같다.

구분	단위	산출식		비고
원형부재	㎡	면	2×π×r×ℓ
		마구리	π×r2
각형부재	㎡	면	(a 또는 b)×ℓ×면의수
		마구리	a×b
판재	㎡	면	a×b
[주] ① a:가로, b:세로, r:반지름, ℓ:부재길이 ② 원형부재는 기둥, 굴도리, 서까래, 선자서까래, 동자기둥을 말한다. ③ 각형부재는 보, 창방, 평방, 납도리, 장여, 인방, 벽선, 부연, 목기연, 평고대, 추녀, 사래, 살미, 첨차, 익공, 대공, 보아지, 갈모산방, 포대공, 주두, 소로를 말한다. ④ 판재는 개판, 박공널, 풍판, 착고판, 판대공, 화반을 말한다. ⑤ 따내기, 홈파기, 파내기, 그레질, 후리기, 바데떼기, 모접기, 소매걷이 및 이에 준하는 것의 면적은 공제하지 아니한다. ⑥ 부재마다 단청문양별(가칠, 긋기, 모로, 금모로, 금단청)로 면적을 산출한다. ⑦ 수량산출도식 ㉮ 창방, 평방, 장여, 납도리, 인방 등 : 최대단면 기준 - 측면 모로단청 : b×ℓ×2면(가칠) b×ℓ1×2×2면(채색) 금·금모로단청 : b×ℓ×2면(가칠) b×ℓ×2×2면(채색) - 배면 : 벽체의 유무에 따라 가감한다. ㉯ 평서까래 : 주심도리 위 최대단면 기준 - 뒤뿌리 비노출 : 2×π×r×ℓ1(가칠) 2×π×r×ℓ1(채색) - 뒤뿌리 노출 : 2×π×r×ℓ(가칠) 2×π×r×ℓ1(채색) - 마구리 : π×r2 ㉰ 선자서까래 : 주심도리 위 최대단면 기준 - 뒤뿌리 비노출 : 2×π×r×ℓ1(가칠) 2×π×r×ℓ1(채색) - 뒤뿌리 노출 : 2×π×r×ℓ1+2×r×ℓ2 ×1/2(가칠) 2×π×r×ℓ1(채색) - 마구리 : π×r2 ㉱ 부연, 목기연 등 : 최대단면 기준 - 밑면 : a×ℓ1 - 측면 : b×ℓ1×2면 - 마구리 : a×b ㉲ 살미, 첨차, 익공 등 : 최대단면 기준 - 밑면 : a×ℓ - 측면 : b×ℓ×2면 - 마구리 : a×b×2면 ㉳ 주두·소로 : 최대단면 기준 - 측면 : a×h×4면

조정

13-12 먹긋기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow Permanent Black P.R Colonyl 호분 밀가루 아교 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g 인 식	7.3 6.25 1.4 2.1 7.5 83.3 8.2 5.3 0.09 1
[주] ① 고색단청(먹긋기)할 때는 품을 100% 가산한다. ② 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

13-12 먹긋기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow Permanent Black P.R Colonyl 호분 밀가루 아교 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g 인 식	7.3 6.25 1.4 2.1 7.5 83.3 8.2 5.3 0.09 1
[주] ① 고색단청(먹긋기)할 때는 품을 100% 가산한다. ② 가칠은 별도 계상한다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

조정

13-13 색긋기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호 분 밀가루 아 교 Emerald Green Toluidine Red Permanent Black P.R Colonyl Permanent Orange G Lead Red 화 공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g g g g g 인 식	7.3 6.25 1.4 2.1 83.3 8.2 103.3 25 2.5 10.7 4.6 3.8 0.18 1
[주] ① 고색단청(먹긋기)할 때는 품을 100% 가산한다. ② 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

13-13 색긋기

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호 분 밀가루 아 교 Emerald Green Toluidine Red Permanent Black P.R Colonyl Permanent Orange G Lead Red 화 공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g g g g g 인 식	7.3 6.25 1.4 2.1 83.3 8.2 103.3 25 2.5 10.7 4.6 13.8 0.18 1
[주] ① 고색단청(색긋기)할 때는 품을 100% 가산한다. ② 가칠은 별도 계상한다. ③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

조정

13-14 모로단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 Emerald Green Permanent Orange G Lead Red Cobalt Blue Iron Oxide Red Permanent Yellow Chrome Yellow 이산화크롬 Permanent Black P.R Colonyl Toluidine Red 특수화공 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g g g g g g g g g g 인 인 식	7.3 21.75 36 2.1 78.3 8.2 69.3 76.9 13.4 40.6 36.4 27.5 5.3 15.7 4.7 14.4 12 0.25 0.28 1
[주] ① 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ② 타초본만들기품은 “13-4 타초본만들기”에 따른다. ③ 콘크리트건물일 경우에는 아교를 대체하여 아크릴에멀죤 150g을 사용한다.

13-14 모로단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 Emerald Green Permanent Orange G Lead Red Cobalt Blue Iron Oxide Red Permanent Yellow Chrome Yellow 이산화크롬 Permanent Black P.R Colonyl Toluidine Red 특수화공 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g g g g g g g g g g 인 인 식	7.3 21.75 36 2.1 78.3 8.2 69.3 76.9 13.4 40.6 36.4 27.5 5.3 15.7 4.7 14.4 12 0.25 0.28 1
[주] ① 가칠은 별도 계상한다. ② 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ③ 타초본만들기품은 “13-4 타초본만들기”에 따른다. ④ 콘크리트건물일 경우에는 아교를 대체하여 아크릴에멀죤 150g을 사용한다.

조정

13-15 금모로단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 Emerald Green Permanent Orange G Lead Red Cobalt Blue Iron Oxide Red Permanent Yellow Chrome Yellow Chrome Oxide Green Permanent Black P.R Colonyl Toluidine Red 특수화공 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g g g g g g g g g g 인 인 식	7.3 29.55 47.4 2.1 78.3 8.2 91 86.19 13.95 46.7 43.56 28.4 5 15.2 5.8 16.4 13 0.36 0.60 1
[주] ① 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ② 타초본만들기품은 “13-4 타초본만들기”에 따른다.

13-15 금모로단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 Emerald Green Permanent Orange G Lead Red Cobalt Blue Iron Oxide Red Permanent Yellow Chrome Yellow Chrome Oxide Green Permanent Black P.R Colonyl Toluidine Red 특수화공 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g g g g g g g g g g 인 인 식	7.3 29.55 47.4 2.1 78.3 8.2 91 86.19 13.95 46.7 43.56 28.4 5 15.2 5.8 16.4 13 0.36 0.60 1
[주] ① 가칠은 별도 계상한다. ② 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ③ 타초본만들기품은 “13-4 타초본만들기”에 따른다.

조정

13-16 금단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 Emerald Green Permanent Orange G Lead Red Cobalt Blue Iron Oxide Red Iron Permanent Yellow Chrome Yellow 산화크롬 Permanent Black P.R Colonyl Toluidine Red 백분 분환 특수화공 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g g g g g g g g g g 식 식 인 인 식	7.3 29.55 47.4 2.1 78.3 8.2 91 101.4 18.2 55 56.9 33.4 5.8 17.8 6.8 19.2 15 1 1 0.39 0.64 1
[주] ① 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ② 타초본만들기품은 “13-4 타초본만들기”에 따른다.

13-16 금단청

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
Phytalo Cyanine Green Ultramarine Blue Titanium Dioxide R760 Iron Oxide Yellow 호분 밀가루 아교 Emerald Green Permanent Orange G Lead Red Cobalt Blue Iron Oxide Red Iron Permanent Yellow Chrome Yellow 산화크롬 Permanent Black P.R Colonyl Toluidine Red 백분 분환 특수화공 화공 공구손료	인력품의 3%	g g g g g g g g g g g g g g g g g 식 식 인 인 식	7.3 29.55 47.4 2.1 78.3 8.2 91 101.4 18.2 55 56.9 33.4 5.8 17.8 6.8 19.2 15 1 1 0.39 0.64 1
[주] ① 가칠은 별도 계상한다. ② 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다. ③ 타초본만들기품은 “13-4 타초본만들기”에 따른다.

조정

13-17 별화

13-17-1 단순

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특수화공 공구손료	인력품의 3%	인식	1.01 1
[주] ① 본 품은 부재의 전체 또는 부분이나 계풍 등에 동‧식물 등의 그림을 그리는 경우를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 조채, 밑그림, 채색까지를 기준으로 한 것이다. ③ 재료는 설계수량으로 별도 계상한다. ④ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

13-17-2 복잡

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특수화공 공구손료	인력품의 3%	인식	1.7 1
[주] ① 본 품은 부재의 전체 또는 부분이나 계풍등에 인물‧용 등의 그림을 그리는 경우를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 조채, 밑그림, 채색까지를 기준으로 한 것이다. ③ 재료는 설계수량으로 별도 계상한다. ④ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

13-17 별화

13-17-1 단순

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특수화공 공구손료	인력품의 3%	인식	1.01 1
[주] ① 본 품은 부재의 전체 또는 부분이나 계풍 등에 동‧식물 등의 그림을 그리는 경우를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 조채, 밑그림, 채색까지를 기준으로 한 것이다. ③ 재료는 설계수량으로 별도 계상한다. ④ 가칠은 별도 계상한다. ⑤ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

13-17-2 복잡

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특수화공 공구손료	인력품의 3%	인식	1.7 1
[주] ① 본 품은 부재의 전체 또는 부분이나 계풍등에 인물‧용 등의 그림을 그리는 경우를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 조채, 밑그림, 채색까지를 기준으로 한 것이다. ③ 재료는 설계수량으로 별도 계상한다. ④ 가칠은 별도 계상한다. ⑤ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

조정

13-18 벽화

13-18-1 단순

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특수화공 공구손료	인력품의 3%	인식	0.76 1
[주] ① 본 품은 벽체에 동‧식물 등의 그림을 그리는 경우를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 조채, 밑그림, 채색까지를 기준으로 한 것이다. ③ 재료는 설계수량으로 별도 계상한다. ④ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

13-18-2 복잡

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특수화공 공구손료	인력품의 3%	인식	1.18 1
[주] ① 본 품은 벽체에 인물‧용 등의 그림을 그리는 경우를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 조채, 밑그림, 채색까지를 기준으로 한 것이다. ③ 재료는 설계수량으로 별도 계상한다. ④ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

13-18 벽화

13-18-1 단순

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특수화공 공구손료	인력품의 3%	인식	0.76 1
[주] ① 본 품은 벽체에 동‧식물 등의 그림을 그리는 경우를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 조채, 밑그림, 채색까지를 기준으로 한 것이다. ③ 재료는 설계수량으로 별도 계상한다. ④ 가칠은 별도 계상한다. ⑤ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

13-18-2 복잡

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
특수화공 공구손료	인력품의 3%	인식	1.18 1
[주] ① 본 품은 벽체에 인물‧용 등의 그림을 그리는 경우를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 조채, 밑그림, 채색까지를 기준으로 한 것이다. ③ 재료는 설계수량으로 별도 계상한다. ④ 가칠은 별도 계상한다. ⑤ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다.

신설

13-20 면닦기(단청제거)

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
화공 공구손료	인력품의 5%	인식	0.68 1
[주] ① 본 품은 접착제로 아크릴에멀젼을 사용한 부재의 기존 단청을 전체 또는 부분적으로 제거할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 보양, 면닦기, 청소까지를 기준으로 한 것이다. ③ 중첩된 문양을 확인, 기록하는 품은 별도 계상한다. ④ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장‧단청공사용)”에 따른다

제15장 기타공사

조정

15-0 적용기준

2. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 한식석공편수

토석담, 거친돌담, 사괴석담 : 20㎡당 1인

② 한식미장공편수

돌각담, 판축담, 토담 : 3㎥당 1인

15-0 적용기준

2. 편수산정기준은 다음과 같다.

① 한식석공편수

토석담, 거친돌담, 사괴석담 : 20㎡당 1인

돌각담 : 3㎥당 1인

② 한식미장공편수

판축담, 토담 : 3㎥당 1인