수리시행 단계별 업무안내

단계	업무종류	세부사항	업무담당
			발	주 자		비상주 감리원	문화재 수리업자
					감독관
수리착공	·감리계약 체결	·P.Q기준 ·감리업무수행계획서, 감리원 배치계획서			작성 검토
	·민원해결, 용지보상등의 지원업무를 수행 ·감리업무 착수 ·업무연락처 등의 보고				주관	시행 시행
	·설계도서 등의 관리	·설계도서 등의 관리				시행
	·착공신고서				검토		작성
	·측량기준점 및 각종 규준 시설	·측량기준점의 보호			이동시 승인	확인	시행
		·규준시설 설치			확인	확인	시행
	·확인측량	·확인측량 실시			입회,확인	입회,확인	시행
		·확인측량 결과의 처리	지시		검토,보고	보고	작성
	·유관자 합동회의				주관	내용설명
	·인·허가 업무		주관		요구		요구
	·수리착수 회의		주관				주관
	·품질보증계획 (품질시험계획)		승인		검토		주관

단계	업무종류	세부사항	업무담당
			발	주 자	비상주 감리원	문화재 수리업자
				감독관
수리시공 (1)	·일반행정업무	·감리원에 대한 지도관리 ·감리기록관리 ·발주자에게 정기 및 수시 보고사항 ·자문자료 작성	승인 접수	주관 확인 보고	작성 검토 검토,보고	작성
수리시공 (2)	·일반행정업무	·민원사항 ·발주자의 지시사항 전달 및 수리수행상 문제점 파악보고 ·기성검사 입회 ·추가용지보상 업무 ·문화재수리업자에 대한 지시 ·수명사항의 처리 ·수리 진행과정 사진 촬영 및 설명서 작성	요구 주관 주관 지시	조치 주관 입회 협조 검토 주관	검토,보고 입회 보고 보고 보관	조치 협조 결과보고 이행 주관
	·품질관리	·품질관리계획 ·품질시험계획 ·품질시험의 요령 및 조치 ·시험·검사성과 처리	주관 승인 승인 승인	이행확인 이행확인 확인 확인,지시	검토,보고 검토,보고 입회확인 검토,확인	작성 작성 시행 보고
	·시공관리	·내주 작업실적 및 내주 작업계획서 ·시공확인 ·검측업무 ·매몰부분 검사 ·현장 실정보고		확인,지시 요구 확인	검토,확인 확인,보고 학인 작성,확인 검토,보고	작성,협의 요청 요청

단계	업무종류	세부사항	업무담당
			발	주 자	비상주 감리원	문화재 수리업자
				감독관
수리시공 (3)	·시공관리	·주요기자재 공급원의 검토 ·주요기자재의 검수,관리 ·지급자재의 검수,관리		승인 확인 확인	검토 확인 확인	작성 작성, 시행 작성, 시행
	·설계변경 및 계약금액의 조정	·경미한 설계변경 ·설계변경 서류작성 ·자문위원회, 문화재원형의확인	시행	검토,지시 확인 검토	검토,지시 보고 검토,보고 검토,확인	작성 작성 작성
	·공정관리	·공정관리계획서 ·수리진도관리 (월간·주간 상세공정표) ·부진공정 만회대책 ·수정 공정계획 ·준공기한 연기신청서 ·공정현황 보고	승인	승인 검토,확인 지시 확인 확인,보고 확인	검토 검토,보고 검토,보고 검토,보고 검토 검토,보고	작성 작성 작성 작성 작성 보고

단계	업무종류	세부사항	업무담당
			발	주 자	비상주 감리원	문화재 수리업자
				감독관
기성부분 및 준공검사	·검사지침	· 기성내역서 검토 ·감리조서의 작성 ·기성부분 검사 ·준공검사원 ·준공도면 등의 검토	승인 검사	검토 작성 입회 검토,확인 검토,확인	검토,보고 입회 검토 검토,보고	작성 입회 작성 작성
인계인수	·시설물 인수․인계 ·준공 후 현장문서 인수․인계	·시설물 인계․인수 계획수립 ·시설물 인계․인수 ·준공도서 등의 인수	시행 협의	입회,검토 인수	검토,통보 입회,검토 작성,입회	작성 시행
	·시정조치	·문화재감리원 시정조치	지시		수행

□ 감리 보고 서식

[별지 제1호] ～ [별지 제21호]

□ 기타 서식

[별지 제22호] ～ [별지 제31호]

□ 별표

[별표 1] ～ [별표 3]

	유 의 사 항
이 지침서에 제시된 각종 서식은 일반적인 수리현장에 적용할 표준적인 서식으로서 당해 현장의 특수한 실정과 발주자의 형편에 따라 변형하여 적용할 수 있음. 따라서 현장에 적용할 서식은 사전에 발주자와 협의ㆍ결정한 후 사용토록 하여야 함.

[별지 제1호서식]

공사계약번호 - 보고일련번호

○  ○  부  ○  ○ 청

-------------------------------------------------------------------------------------------------

○○ ○○○○

중 간 감 리 보 고 서

20  년   월

○  ○  주 식 회 사

대표이사 ○ ○ ○

[별지 제2호서식]

(제 1 쪽)

목      차

구 분	제 목
제 1 장	문화재수리 추진현황
1.1	문화재수리 개요
1.2	문화재비상주감리 개요
1.3	문화재감리 조직
제 2 장	문화재감리원 감리일지
2.1	비상주감리원 감리일지
2.2	비상주감리원 근무상황판
제 3 장	주요 공정별 사전 현황조사
3.1	주요 공정별 사전 현황조사부
제 4 장	품질시험 및 검사현황
4.1	품질시험․검사대장
4.2	구조물별 콘크리트 타설현황
4.3	콘크리트 타설 참여자(기능자 포함) 실명부
제 5 장	검측요청 및 결과 통보내용
5.1	검측요청서 및 검측결과통보
5.2	주요 공정별 시공 현황(기능자 명단 포함)
5.3	검측체크리스트
제 6 장	주요자재 검사 및 수불 내용
6.1	주요자재 검사 및 수불부

(제 2 쪽)

구 분	제 목
제 7 장	문화재수리 설계변경 현황
7.1	문화재수리 설계변경 현황
7.2	현장 실정보고 현황
7.3	기술 검토 사항
제 8 장	문화재 원형 및 고증과 관련된 자문․검토․확인 내용
8.1	자문회의록
8.2	문화재수리 전후 사진
제 9 장	그 밖에 발주자가 필요하다고 인정하여 계약에서 정한 내용

[별지 제3호서식]

(제 1 쪽)

제1장  문화재수리 추진 현황

1.1 문화재수리 개요

◦사 업 명 ◦위 치 ◦사 업 유 형 ◦사 업 내 용 ◦공 사 기 간 ◦준공 예정일자 ◦총 사 업 비	: : : : : : :

(단위:백만원)

총사업비	도 급 액	관 급 액	보 상 비	설계비	감리비

◦ 낙찰률 :

◦ 문화재수리업자 :

※ 공동도급일 경우 지분율 표기

◦ 현장대리인 :

◦ 입찰방법 :

※ 작성요령

1. 공동도급일 경우 지분율 및 이행방식을 기재합니다.

2. 공종별 분리발주 시 각각의 계약내용을 전부 기재합니다.

ㅇ 수리현장 조직(“예”)

															현장대리인
																												안전관리자
공무담당자									수리담당자										수리담당자										품질관리자
공 무									공 사										공 사										시험보조

(제 2 쪽)

1.2 문화재비상주감리 개요

◦계 약 일 자 ◦준공 예정일자 ◦계 약 금 액 ◦감 리 기 간 ◦문화재감리업자 ◦낙 찰 률 ◦입 찰 방 법	: : : : : : :

1.3 문화재감리 조직(“예”)

[비상주감리원]

								담 당					총 괄
								(등 급)					(성 명)
담당	공무관리			담당	수리관리				담당			수리관리				담당			품질관리			담당		안전관리
(등급)	(성 명)			(등급)	(성 명)				(등급)			(성 명)				(등급)			(성 명)			(등급)		(성 명)

[기술지원자]

구 분	성 명	기술자격 종목

[별지 제4호서식]

(제 1 쪽)

제2장 문화재감리원 감리일지

2.1 비상주감리원 업무일지

감리일지
사업명			연 월 일 (요일)						날씨			누계 공정
주요 작업 상황	공 종	단 위	설계량		당 일				누계 작업량		공정 (%)	특이사항
					작업 위치			작업량
문화재 감리원 업무 수행 내용	성 명	서 명	주 요 업 무 수 행 내 용									지시사항
관련 문서	업무 분류	문서 분류		공종 구분			위 치			제 목(내용 요약)
특 이 사 항
※ 작성요령 1. 비상주감리원은 본인의 업무 내용을 육하원칙에 따라 기록하고, 수리 추진 내용, 검측 결과, 현장실정 보고 등을 빠짐없이 기록ㆍ서명하여 현장 내용을 파악할 수 있도록 작성한다. 2. 주요 작업 상황은 수리 추진 계획에 따라 당일 작업 내용이나 그와 관련된 공종에 대한 업무 수행 내용을 상세히 작성한다.
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제4호의2서식]

(제 2 쪽)

2.3 비상주감리원 근무상황판

년   월  일(   요일)

성명	시 간	용 무	연락처	비고
○○감리원 ○ ○ ○	09:00 ~ 12:00	발주자 업무협의	사무실 및 핸드폰
※작성요령 1. 두꺼운 종이나 합판 등으로 상황판을 제작하며, 표지에 아스테이지 등을 씌워 매일 기록 가능하도록 한다. 2. 규격은 가로 80㎝, 세로 100㎝에 종으로 작성하며, 문화재감리 사무실의 출입구 부근에 부착한다. 3. 근무상황판에는 비상주감리원의 근무상황을 기록한다.

[별지 제5호서식]

제3장 주요 공정별 사전 현황조사

3.1 주요 공정별 사전 현황조사부

사업명 :

조 사 일	공 정	조 사 내 용	조 사 자
※작성요령 1.조사내용란에는 파손정도, 부재관련 사항(재질, 색깔, 규격, 형태 등), 시공방법 등을 조사하여 문화재 원형의 확인에 기인할 수 있도록 상세히 기입합니다.

[별지 제6호서식]

제 4 장 품질시험 및 검사현황

4.1 품질시험․검사대장

사업명 :

일련 번호	년 월 일	시험․검사구분	재료	시험․검사항목	시험 기준	시험 결과	시험 결과 판정	시험․검사자		비상주감리원확인		비고
								성 명	서 명	성 명	서 명
※작성요령 1. 건설 자재별로 기재(콘크리트 타설은 별지 제6호의2서식으로 작성)합니다 2. 시험성과표는 별도 기재합니다. 3. 비고란에는 시험결과 불합격 되었을 경우 조치내용 등을 기재합니다.

[별지 제6호2서식]

(제 1 쪽)

4.2 구조물별 콘크리트 타설현황

구조 물명	타설 일자	타설 부위	설계량 (㎥)	타설량 (㎥)	콘크 리트 배합 종류	납품 회사	타설 방법	타설 시간	타설시 온 도 (℃)	시 험 결 과				시 험 자
										슬럼프 (㎝)	공기량 (%)	염분량 (㎏/㎥)	28일 압축 강도 (kg/㎝2)	문화재 수리업자		문화재 감리원
														성명	서명	성명	서명

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※ 작성요령

1. 슬럼프, 공기량과 28일강도 시험자가 다를 경우 슬럼프, 공기량 시험자는 상단에, 28일강도 시험자는 하단에 성명과 서명

2. 직접타설 : Mixer Truck으로부터 직접 받아 타설.   3. Pump : Pump Car로 타설,    4. 콘크리트 배합 사례

	․	25-210-08을 A1으로 할 경우
		25-210-12는 A2
		25-210-15는 A3 등으로 기재합니다.

	․	19-240-08을 B1으로 할 경우
		19-240-12는 B2
		19-240-15는 B3 등으로 기재합니다.

(제 2 쪽)

4.3 콘크리트 타설 참여자(기능공 포함) 실명부

사업명 :

타설일	타설위치	소속	직위	성명	생년월일 (성별)	수리한 내용	서 명
※작성요령 1. 수리한 내용은 수리관리, 작업총괄, 레미콘 차량관리, 펌프카 노즐담당, 콘크리트 타설, 콘크리트 다짐, 거푸집 및 동바리 변형 감시, 콘크리트 마무리면 정리, 양생재 포설 등으로 구분하여 기재합니다. 2. 생년월일 : 주민등록상 생년월일

[별지 제7호서식]

(제 1 쪽)

제 5 장 검측요청 및 결과 통보내용

5.1 검측요청서 및 검측결과통보

검 측 요 청 서

번호 :                                            20  .   .   .

받음 : ○○수리 비상주감리원  ○○○

다음과 같은 세부공종에 대하여 검측요청 하오니 검사 후 승인하여 주시기 바랍니다.

위 치 및 공 종
검 측 부 위
검 측 요 구 일 시
검 측 사 항

붙임 : 문화재수리업자의 검측 체크리스트, 시험성과, 문화재수리업자의 야장 및 도면, 문화재수리 참여자(기능자 포함) 실명부

문화재수리업자     점 검 직 원          (인)

현장대리인           (인)

.....................................................................................................................................

검 측 결 과  통 보

번호 :                                            20  .   .   .

받음 : ○○수리 현장대리인  ○○○

문서번호 ○○로 검측요청 한 건에 대하여 20  .   .     . 검측한 결과를 다음과 같이 통보합니다.

1. 검측결과

2. 지시사항

붙임 : 비상주감리원의 검측 체크리스트

현장분산감리원            (인)

※ 작성요령

1. 재검측시에는 붉은 글씨로 “(재)”를 우측 상단에 작성합니다.

2. 문화재수리업자가 재검측 요청할 때에는 잘못 시공한 기능자의 성명을 받아 그 명단을 첨부하여야 합니다.

3. 2부 작성하여 문화재수리업자, 비상주감리원이 각 1부를 보관하여야 합니다.

(제 2 쪽)

5.2 주요 공정별 시공 현황(기능자 명단 포함)

사업명 :

작업일	작업위치 및 공종	소 속	직 위	성 명	생년월일 (성별)	수리한 내용	서 명
※작성요령 1. 생년월일 : 주민등록상 생년월일

(제 3 쪽)

5.3 검측 체크리스트

공종 CODE №		위치 및 부위
공종(세부공종)		수 리 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격

문화재수리업자 점검일자	년 월 일	점 검 직 원	(인)
비상주감리원 검측일자	년 월 일	비상주감리원	(인)

※작성요령

1. 검사결과 상단은 문화재수리업자 점검직원이, 하단은 비상주감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는 검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 기재합니다.

2. 매몰부분은 사진을 첨부한다

3. 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 비상주감리원과 협의하여 기재합니다.

[별지 제8호서식]

제6장 주요자재 검사 및 수불 내용

6.1 주요자재 검사 및 수불부

품명 :

설계량	단위	규격	반입일	반입량	합격량	불합격		출고일	출고량	잔량	검수자	서명
					금회 누계	불합격량	사유
※작성요령 1. 상단은 반입검수자가 하단은 출고검수자가 기재합니다. 2. 현장 반입 후 작업장 반출 시 까지는 비상주감리원의 감독하에 관리합니다.

[별지 제9호서식]

제7장 문화재수리 설계변경 현황

7.1 문화재수리 설계변경 현황

(1) 변경회수 :

(2) 변경일자 :

(3) 주요변경내용

공 종	수 량			공 사 비(백만원)			변 경 사 유	비 고
	단위	당초	변경	당초	변경	증ㆍ감
계

7.2 현장 실정보고 현황

번 호	보고일 (문서번호)	승인일 (문서번호)	제목	내용	비 고
계

7.3 기술검토 사항

번 호	보고일자 (문서번호)	제 목	주요내용	비 고

[별지 제10호서식]

(제 1 쪽)

제8장 문화재 원형 및 고증과 관련된

자문․검토․확인 내용

8.1 자문회의록

안 건
일 시
장 소
참 석 자
회의결과
회의사진

(제 2 쪽)

8.2 문화재수리 전후 사진

사업명 :

수리 전	(내용)	촬영일시	00년 00월
수리 후	(내용)	촬영일시	00년 00월

[별지 제11호서식]

공사계약번호 - 보고번호

○  ○  부  ○  ○ 청

-------------------------------------------------------------------------------------------------

○○ ○○○○

최 종  감 리 보 고 서

20  .  .

○  ○  주 식 회 사

대표이사 ○ ○ ○

[별지 제12호서식]

(제 1 쪽)

목       차

구 분	제 목
제 1 장	문화재수리 및 감리용역 개요
1.1	사업목적
1.2	문화재수리 개요
1.3	문화재비상주감리 개요
1.4	문화재실측설계용역 개요
1.5	위치도
제 2 장	문화재수리 추진 실적의 종합
2.1	기성 및 준공검사 현황
2.2	공종 및 년도별 추진실적
2.3	설계변경 현황
2.4	실정보고 처리현황
2.5	발주자 지시사항 처리현황
2.6	주요인력 및 장비 투입현황
2.7	하도급 현황
2.8	문화재감리용역 설계변경 현황
2.9	비상주감리원 투입현황
제 3 장	검측 실적의 종합
3.1	검측관리실적
3.2	검측관리 종합분석
제 4 장	품질시험 및 검사 실적의 종합
4.1	품질관리자
4.2	시험장비 사용현황
4.3	시험실 배치 평면도
4.4	품질시험․검사성과 총괄표
4.5	품질관리 종합분석

(제 2 쪽)

구 분	제 목
제 5 장	주요자재 관리 실적의 종합
5.1	자재공급원 승인현황
5.2	주요자재 투입현황
5.3	주요자재관리 종합분석
제 6 장	공정별 기술검토 내용의 종합
6.1	공정별 기술검토 현황
6.2	주요기술검토내용
제 7 장	문화재의 원형 및 고증과 관련된 자문․검토․확인 실적의 종합
7.1	자문회의 실적
제 8 장	문화재수리기술자, 문화재수리기능자 및 관계전문가의 성명 및 업무 내용
8.1	문화재수리기술자 성명 및 업무 내용
8.2	문화재수리기능자 성명 및 업무 내용
8.3	관계전문가 성명 및 업무 내용
제 9 장	종합분석
제 10 장	발주자가 필요하다고 인정하여 계약에서 정한 내용

[별지 제13호서식]

(제 1 쪽)

제1장 문화재수리 및 감리용역 개요

1.1 사업목적

ㅇ

1.2 문화재수리 개요

◦ 사 업 명 :

◦ 위    치 :

◦ 사업내용 :

◦ 사업유형 :

◦ 공사기간 :

◦ 총사업비 :

(단위:백만원)

총사업비	도 급 액	관 급 액	보 상 비	설계비	감리비

◦ 낙찰률 :

◦ 문화재수리업자 :

※ 공동도급일 경우 지분율 표기

◦ 입찰방법 :

ㅇ 수리현장 조직(“예”)

															현장대리인
																												안전관리자
공무담당자									수리담당자										수리담당자										품질관리자
공 무									공 사										공 사										시험보조

(제 2 쪽)

1.3 문화재비상주감리 개요

ㅇ계 약 일 자 ㅇ용 역 기 간 ㅇ준 공 금 액 ㅇ문화재감리업자 ㅇ낙 찰 률 ㅇ입 찰 방 법	: : : : : :

ㅇ감리 조직(“예”)

[ 비상주감리원 ]

								담 당				총 괄
								(등 급)				(성 명)
담당	공무관리			담당	수리관리				담당		수리관리				담당			품질관리			담당		안전관리
(등급)	(성 명)			(등급)	(성 명)				(등급)		(성 명)				(등급)			(성 명)			(등급)		(성 명)

[ 기술지원자 ]

구 분	성 명	기술자격 종목

1.4 문화재실측설계용역개요

ㅇ계 약 일 자 ㅇ용 역 기 간 ㅇ준 공 금 액 ㅇ문화재실측설계업자 ㅇ낙 찰 률 ㅇ입 찰 방 법	: : : : : :

(제 3 쪽)

1.5 위치도(1/25,000)

[별지 제14호서식]

(제 1 쪽)

제2장 문화재수리 추진 실적의 종합

2.1 기성 및 준공검사 현황

년도 (차수)	구 분	기성 및 준공금액	검사일	검사자	비고

(제 2 쪽)

2.2 공종 및 년도별 추진실적(건축“예”)

(단위:백만원)

공종	구 분 분 야	단위	전 체		20 년도(1차)		20 년도(2차)		20 년도(3차)		20 년도(4차)
			공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비
토목공사	토공사	㎥
	가시설공사	식
	지하 연속 벽공사	식
	부대공사	식
	운 반 비	식
	안전계측	식
	부대토목	식
	소 계	식
건축공사	철거공사	식
	가설공사	개월
	기초공사	식
	기단공사	식
	목공사	식
	지붕공사	식
	전돌공사	식
	미장공사	식
	창호공사	식
	온돌공사	식
	수장공사	식
	철물공사	식
	석공사	식
	석조물공사	식
	성곽공사	식
	단청공사	식
	유구정비공사	식
	조경공사	식
	기타공사	식
	보존처리공사	식
	소 계	식
기계설비공사	옥외배관공사	식
	소화설비공사	식
	정화조및폐수 설비공사	식
	기타공사	식
	소 계	식

(제 3 쪽)

공종	구분 분야	단위	전 체		20 년도(1차)		20 년도(2차)		20 년도(3차)		20 년도(4차)
			공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비
전기공사	수․변전 설비공사	식
	전력간선 설비공사	식
	동력 설비공사	식
	전등 설비공사	식
	전열 설비공사	식
	피뢰침및접지공사	식
	전력CABLE TRAY공사	식
	전력및조명제어공사	식
	SNOW MELTING공사	식
	자동화재 탐지 설비공사	식
	무선통신보조및중계설비	식
	정화조 설비 공사	식
	가설공사	식
	소 계	식
통신공사	통합배선 설비공사	식
	CATV 설비공사	식
	CCTV 설비공사	식
	상호식 인터폰 설비공사	식
	주차 관제공사	식
	NURSE CALL설비공사	식
	전기시계 및 투약순번 안내공사	식
	방송 설비공사	식
	가설공사	식
	소 계	식
합 계
순 공사비		식
사급자재비		식
T. A. B		식
제경비		식
공급가액		식
부가세		%
총 계		식
※작성요령 1. 전체 계획에서 공사량은 설계수량, 공사비는 계약금액을 기준으로 합니다. 2. 공사량은 규격 등에 상관없이 합산 가능한 물량은 합산하여 기재하고 합산이 불가한 것은 주자재 물량으로 기재하되 공사비는 해당분야 총공사비를 기재합니다.

(제 4 쪽)

2.3 설계변경 현황

단위 : 천원

변경 회수별	계약일자	총수리비	도급액	관급 자재비	기타	설계변경내용
당 초

(제 5 쪽)

2.4 실정보고 처리현황

번 호	보고일 (문서번호)	승인일 (문서번호)	제목	내용

(제 6 쪽)

2.5 발주자 지시사항 처리현황

번 호	접수일	문서번호	지시사항	처리내용

(제 7 쪽)

2.6 주요인력 및 장비투입 현황

인 원 투 입 현 황			장 비 투 입 현 황
직종	투입인원	비고	장비명	규격	투입대수	비고

(제 8 쪽)

2.7 하도급 현황

공 종	협력업체명				하도급 금액 (천원)	하도급율(%)	수리기간	현장 대리인
	상 호	대표자	업종및 면허	전화번호

(제 9 쪽)

2.8 문화재감리용역 설계변경 현황

구 분	계약일자	계약금액	설계변경내용	비 고
당 초

(제 10 쪽)

2.9 비상주감리원 투입현황

구분	성명	담당업무	기술자격	참여등급	참여기간	비고
비상주감리원

[별지 제15호서식]

제3장 검측 실적의 종합

3.1 검측관리실적(건축 “예”)

공 종	검 측 결 과(건수)			비 고
	합격	불합격	재검측
계
토목공사
건축공사
기계설비공사
전기공사
통신공사
자재검수

3.2 검측관리 종합분석

ㅇ

[별지 제16호서식]

(제 1 쪽)

제4장 품질시험 및 검사 실적의 종합

4.1 품질관리자

성 명	등 급	품질관리업무 수행기간	비 고
			* 기술자격 또는 학·경력사항 기재

4.2 시험장비 사용현황

장비명	규 격	단 위	수 량	비 고

(제 2 쪽)

4.3 시험실 배치평면도

4.4 품질시험․검사성과 총괄표

공 종	시험․검사종류 (재 료)	시험․검사회수					비 고
		계 획	실 시	합 격	불합격	재시험

4.5 품질관리 종합분석

ㅇ

[별지 제17호서식]

(제 1 쪽)

제5장 주요자재 관리 실적의 종합

5.1 자재공급원 승인현황

품 명	규 격	공급원	승인일	비고

(제 2 쪽)

5.2 주요자재 투입현황

5.2.1 관급자재 투입현황

품 명	규 격	단 위	설계량	반입량	사용량	잔 량

5.2.2 사급자재 투입현황

품 명	규 격	단 위	설계량	반입량	사용량	잔 량

5.3 주요자재관리 종합분석

ㅇ

[별지 제18호서식]

(제 1 쪽)

제7장 공정별 기술검토 내용의 종합

7.1 공정별 기술검토 현황

번 호	보고일자 (문서번호)	제 목	주요내용	비 고

(제 2 쪽)

7.2 주요기술검토내용(“예”)

검토의견서
기술검토건명		보고일자 (문서번호)
검토기간		검토자
1. 검토목적
2. 검토내용
3. 결 과

[별지 제19호서식]

(제 1 쪽)

제8장 문화재의 원형 및 고증과 관련된 자문․검토․확인 실적의 종합

8.1 자문회의 실적

차수	일시	장소	안건	결과	참석자

[별지 제20호서식]

(제 1 쪽)

제9장 문화재수리기술자, 문화재수리기능자 및 관계전문가의 성명 및 업무 내용

9.1 문화재수리기술자 성명 및 업무 내용

성명	업무내용	서명

(제 2 쪽)

9.2 문화재수리기능자 성명 및 업무 내용

성명	업무내용	서명

(제 3 쪽)

9.3 관계전문가 성명 및 업무 내용

성명	업무내용	서명

[별지 제21호서식]

제10장 종합분석(“예”)

1. 서론
2. 공종별 분석
공 종	분석내용	비고
3. 수리추진중 문제점 및 대책, 개선사항
문제점	대책	개선사항
4. 특기사항
5. 맺음말

[별지 제22호서식]

품 질 시 험 계 획

사업명 :                  작  성  일 :        년       월       일

문화재수리업자 :          현장대리인 :             (인 또는 서명)

1. 시험계획회수

공 종	시험종목	시험계획물량	시험빈도	계획시험회수	비 고

2. 시험시설 및 인력배치계획

가. 시험시설

장 비 명	규 격	단 위	수 량	비 고

나. 시험인력

등 급	품질관리업무 수행기간	성 명	비 고
			* 기술자격 또는 학·경력사항 기재

[별지 제23호서식] 품질시험․검사성과 총괄 표 사업명 : ○○ ○○(사업기간 . . ～ . . 공정 : %)
공 종	시험․검사종류 (재 료)	시험․검사회수					비 고
		계 획	실 시	합 격	불합격	재시험
작성일시 : 년 월 일 작 성 자 : 소속 : 직위 : 성 명 : (인 또는 서명)

[별지 제24호서식]

품질시험․검사 실적 보고서

공 종	시험․검사 종 목	계획시험 ․ 검사회수	전월까지 시험․검사회수				금월 시험․검사회수				누계 시험․검사회수
			실 시	합 격	불합격	재시험	실 시	합 격	불합격	재시험	실 시	합 격	불합격	재시험

[별지 제25호서식] 검 측 대 장 사업명 : ○○○○ 비상주감리원 : (인)
공 종	검 측 부 위 (설계규격, 단위, 수량 포함)	검측일	검 측 내 용	합격 여부	검측결과 또는 입증자료
주) 매몰부분은 사진 첨부

[별지 제26호서식] 발생품(잉여자재) 정리부 사업명 : 착공일 : . . 품 명 : 규 격 : 준공일 : . .
발생년월일	품 명	규 격	단위	수 량		발생사유	보관사항 (발주자인계여부)
				사용가능	사용불가

[별지 제27호서식]
우편번호 /주소 /전화번호 /팩스 번호 http//www.oo.oo ○○국 ○○과 과장 ○○○ 담당 ○○○
문서번호: 시행일: 받 음: 발 신 : (인) 제 목: 용역계약(□최초, □변경, □기성, □완공)내용을 아래와 같이 통보합니다.
1. 사업개요
사업종류				사업기간
사업개요	(총공사비) 억원(관급 자재비 억원 포함) (계약공사비) 억원(낙찰률: %)						○사업 규모:
문화재수리업자	(회사명) (대표자)
문화재실측설계업자	(회사명) (대표자)
현장소재지
2. 감리현황
감리종류	□문화재상주감리 □문화재비상주감리
용역명칭
용역수행자	(회사명) (대표자)						계약 상대자
선정방식	□수행능력평가방식 □기술ㆍ가격분리입찰방식 □지명경쟁입찰방식 □제한경쟁입찰방식 □공개경쟁입찰방식 □기타
계약형태	□원도급/단독계약 □원도급/공동계약(공동이행, 분담이행) □기타 (낙찰률: %) (감리이행비율: %)
계약방식	□총액계약 □장기계속계약 □계속비
계약 및 이행 내용	구분	금액(천만원)			계약 또는 이행기간				비고
	차수별 기성분				. . ~ . .
	금차 수행분				. . ~ . .
	계약 잔여분				. . ~ . .
	총괄				~
3. 계약 변경(정정) 내용
변경(정정) 구분	변경(정정)일		변경(정정) 전			변경(정정) 후
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제28호서식]
우편번호 /주소 /전화번호 /팩스 번호 http//www.oo.oo ○○국 ○○과 과장 ○○○ 담당 ○○○
문서번호: 시행일: 받 음: 발 신: (인) 제 목:
1. 배치 확인
용역명		(감리 구분)
소속 회사		(회사명) (대표자)
배치일		성명	생년월일(남/여)			등급			근무 형태		직책			수리 종류		비고
. .
. .
. .
. .
. .
2. 철수 확인
용역명										용역기간		. . ~ . .
소속 회사		(회사명) (대표자)
철수일		성명	생년월일(남/여)	철수 구분 (교체/완료)				계획공정기간 (배치계획상 참여 예정기간)							비고 (철수사유)
. .								. . ~ . .
. .								. . ~ . .
. .								. . ~ . .
. .								. . ~ . .
. .								. . ~ . .
3. 정정사항
성명	생년월일(남/여)				항목		당초						정정 내용
							(이미 통보한 내용)						(변경 통보할 내용)
							〃						〃
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제29호서식]
경력확인서								처리기간
								즉 시
제출인 (본인)		성 명		생년월일 (남/여)
		전화번호
		주 소
증명사항	재직기간			소속 및 직위	담당 업무 내용 (구체적으로 적을 것)
	년 월 일 ~ 년 월 일		년 개월
	년 월 일 ~ 년 월 일		년 개월
	년 월 일 ~ 년 월 일		년 개월
	년 월 일 ~ 년 월 일		년 개월
	년 월 일 ~ 년 월 일		년 개월
	년 월 일 ~ 년 월 일		년 개월
	년 월 일 ~ 년 월 일		년 개월
	년 월 일 ~ 년 월 일		년 개월
	년 월 일 ~ 년 월 일		년 개월
경력증명서를 제출합니다. 년 월 일 위 본인 (서명 또는 인) 귀하
위 작성한 사항이 사실과 다름 없음을 증명합니다. 년 월 일 기관명: 주소: 전화번호: 사업자등록번호 또는 대표자 생년월일(남/여): 직인 대표자:					발급자
					소속
					직위
					성명		(서명 또는 인)
귀하
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제30호서식]
현장 배치 확인표							처리기간
							즉 시
일련번호	성 명 (자격번호)	업체명	발주자	공사명	배치기간	확 인 연월일	확 인 (발주자)
1
2
3
4
5
6
『문화재수리 등에 관한 법률 시행규칙』 제19조에 따라 현장 배치 확인표를 제출합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 발주자 귀하
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제31호서식]

사고처리 보고서

사고처리 보고서

─────────────────────────────────

수신 :                       분 류 기 호  :

참조 :                       제출년월일 :

발       신 :                     (서명)

사 업 명
계 약 금 액
문화재수리업자
착 공 년 월 일
준공예정 년월일
사고발생 년월일
최 근 공 정
피 해 개 요
복 구 대 책
첨 부 서 류	피해 광경사진, 피해 내역서

[별표 1]
문화재감리원의 업무 범위(제4조제4항제1호 관련)
구분	업무범위
비상주감리원	가. 문화재수리 계획 및 공정표의 검토 나. 문화재수리가 설계도서 및 관련 규정의 내용에 적합하게 시행되고 있는지에 대한 확인 다. 문화재수리를 위한 문화재 원형의 확인, 고증 관련 자문 내용의 검토ㆍ확인 라. 사용 자재의 규격 및 적합성에 관한 검토ㆍ확인 마. 문화재수리 진척 부분에 대한 조사 및 검사 바. 완료 도면의 검토 및 완료 사실의 확인 사. 그 밖에 문화재수리의 질적 향상을 위하여 필요한 사항

[별표 2]
문화재감리원의 배치기준(제4조제3항제2호 관련)
구분	배치기준
1. 상주감리원	가.법 제2조제1호가목 또는 나목의 경우: 문화재수리 예정금액이 30억원 이상인 문화재수리 나.법 제2조제1호다목의 경우: 문화재수리 예정금액이 50억원 이상인 문화재수리 다.제1호 및 제2호 외의 문화재수리로서 발주자가 문화재 수리의 중요성을 고려하여 상주감리가 필요하다고 인정하는 문화재수리
2. 비상주감리원	제1호에 따른 상주감리원의 상주감리에 해당하지 않는 문화재수리로서 문화재수리 예정금액이 5억원 이상인 문화재수리

[별표 3]

감리대상 문화재수리 범위(제4조제3항제1호 관련)

감리대상 문화재수리 범위

1. 법 제2조제1호가목 또는 나목의 경우: 문화재수리 예정금액이 5억원 이상인 문화재수리. 다만, 동산문화재의 경우는 제외한다.

2. 법 제2조제1호다목의 경우: 문화재수리 예정금액이 7억원 이상인 문화재수리

3. 제1호 및 제2호 외의 문화재로서 역사적ㆍ학술적ㆍ경관적 또는 건축적 가치가 커서 문화재청장이 그 문화재수리의 감리가 필요하다고 인정하여 별도로 정하여 고시하는 문화재의 수리